РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Калининградская область
Городской  Совет депутатов муниципального образования
«Поселок Приморье»

РЕШЕНИЕ

от 02 октября 2012 года                                                                         № 21

О внесении изменений в Программу конкретных дел благоустройства территории муниципального образования «Поселок Приморье» 
в 2012 году

Заслушав информацию и.о. главы администрации муниципального образования «Поселок Приморье», городской Совет депутатов

решил:

1.	В паспорте Программы конкретных дел благоустройства территории муниципального образования «Поселок Приморье» в 2012 году (далее - Программа), утвержденной решением городского Совета депутатов муниципального образования «Поселок Приморье» №3 от 21 февраля 2012 года, число «3495» заменить числом «1471,95».
2.	В пункте 3 Программы слова «1 ноября» заменить словами «25 декабря».
3.	Пункт 7 Программы изложить в новой редакции в соответствии с приложением к настоящему решению.
4.	Опубликовать настоящее решение в газете «Вестник Светлогорска».
5.	Контроль за исполнением решения возложить на главу муниципального образования В.В. Фомина.
6.	Решение вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава муниципального образования
«Поселок Приморье»                                                                       В.В. Фомин

		Приложение
к решению городского Совета депутатов МО «Поселок Приморье»
от 02 октября 2012 года № ____	

7. Мероприятия, планируемые к выполнению в рамках Программы
№	Раздел/виды работ	Ед. изм.	Кол-во	Сроки выполнения работ	Объем финансирования, тыс. рублей, в т.ч.	
						
				Начало	Оконч.	Всего, в т.ч	Местный бюджет	Внебюдж. источники	
1	Освещение	 	 	 	 	 	 	 	
 	Восстановление уличного освещения улиц Садовая, Озерная, Железнодорожная, Дачная в пос. Приморье	протяженность трасс (п.м.) / кол-во светоточек (шт.)	600/22	01.08.2012	30.09.2012	540,15	540,15	0	
 	Итого по разделу 1	 	 	 	 	540,15	540,15	0	
2	Обустройство мест для сбора ТБО	 	 	 	 	 	 	 	
2.1.	Обустройство контейнерных площадок в пос. Приморье на улицах Флотская и Офицерская	кол-во пл-ок (ед.) /  кол-во конт-ров (шт.)	2/4	01.05.2012	30.06.2012	47,0	47,0	0	
2.2.	Приобретение и установка новых контейнеров в пос. Приморье и Лесное для установки на новых контейнерных площадках.	кол-во конт-ров (шт.)	10	01.05.2012	30.06.2012	99,9	99,9	0	
 	Итого по разделу 2	 	 	 	 	146,9	146,9	0	
3	Иные мероприятия	 	 	 	 	 	 	 	
3.1.	Замена части труб системы водопровода в пос. Приморье, ул. Озерная и Садовая	п.м.	350	01.05.2012	30.06.2012	284,9	284,9	0	
3.2.	Приобретение нового оборудования для бани в пос. Приморье	ед.	1	01.09.2012	25.12.2012	500	500	0	
 	Итого по разделу 3	 	 	 	 	784,9	784,9	0	
 	Всего по Программе	 	 	 	 	1471,95	1471,95	0